사업명

설악면 LPG 배관망 사업

담당자

경제과 장상건

(☎580-2271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시가스 공급이 불가능한 설악면 지역의 에너지 복지를 위해 설악면 지역

LPG배관망 사업을 시행하여 서민 경제부담 완화로 주민들의 복지증진과

지역균형발전을 도모할 수 있으며,

○ 난방, 취사비용 절감 등의 직접적 효과뿐만 아니라 가구별 자산 가치 상승, 청정연료 사용으로 미세먼지 발생원을 차단하여 대기오염을 저감시켜 수도권의 맑고 깨끗한 산소탱크 역할을 다할 것으로 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 설악면 7개지역 (신천1리~4리, 선촌1리~2리, 창의리)

○ 규 모 : L=21.4㎞, 저장탱크 7기

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	16,000			4,824	11,176
국 비
시 도 비	7,000			1,500	5,500
시군구비	7,400			3,324	4,076
지 방 채
민간자본
기 타	1,600				1,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 업무협약 체결(2016. 10. 04)

○ 설악면 7개지역 주민설명회 개최(2017. 1월, 3월)

○ 실시설계업체 및 감리업체 선정(2017. 2월)

○ 전선지중화 구간, 신천4리 사업시공자 선정 및 사업 착공(2017. 6월)

□ 향후계획

○ 연료공급사업자 선정 중(2017. 9월)

○ 신천1리~3리 사용 저장탱크 설치장소 선정(2017. 9월)

○ 구간별 사업 착공 및 사업완료(2018. 12월)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

가평 뮤직빌리지 조성사업

담당자

관광사업단 이진어

(☎580-4631)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재즈축제, 자라섬, 남이섬 등 우수한 관광자원과 연계한 문화기반 관광인프라 구축으로 침체된 지역의 경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ∼ 2018. 6.

○ 위 치 : 가평읍 대곡리 148-3일원(구 가평역사)

○ 규 모 : 37,257㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,694백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	40,694	17,300	10,500	3,879	9,015
국 비	500		500
시 도 비	2,720				2,720
시군구비	16,727	7,300	2,000	2,332	5,095
지 방 채	8,000		8,000
기 타	12,747	10,000		1,547	1,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ ′17. 1. 5. 공사 착공

□ 향후계획

○ ′16. 6. 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초						변 경						변경사유
사업비 (억원)	계	국	도	특	시군	기타	계	국	도	특	시군	기타	실시설계 반영
	230			100	130		406	5	27	100	167	107

사업명

북면생활체육공원 조성사업

담당자

문화체육과 공중식(☎580-2503)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북면 지역은 상대적으로 타지역에 비해 체육관련 인프라 시설이 전무한

실정으로 가평군 생활체육 균형발전을 위해 체육시설 필요

○ 생활체육시설 서비스 확대를 통해 주민들의 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 가평군 북면 목동리 931번지 일원

○ 규 모 : 36,302.0㎡

- 야구장, 축구장, 멀티코트, 주차장, 부대시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,540백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,540	350		2,000	4,190
국 비	1,500	-	-	-	1,500
시 도 비
시군구비	5,040	350	-	2,000	2,690
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2016.10.25. : 경기도 투융자심사 완료

○ 2017. 4. 4. : 공유재산 관리계획 완료

○ 2017. 5.11. : 군관리계획(체육시설) 결정 신청

○ 2017. 6. 2. : 농업진흥지역 해제 승인 신청(경기도)

○ 2017. 6.15. : 주민공람공고 완료

○ 2017. 7.03. : 전략환경영향평가서(초안) 검토의견 알림

□ 향후계획

○ 2017.12월 : 군관리계획 변경 결정 및 지형도면 고시

○ 2018. 9월 : 편입토지 수용재결 및 보상협의 완료

○ 2018.10월 : 공사착공

○ 2019.12월 : 공사준공

사업명

북한강 자전거길(청평 쉐르빌 앞) 개선공사

담당자

건설교통과 염한식(☎580-2427)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐선부지(유휴지)를 활용한 자전거도로를 지속적으로 확충·정비하여

군민들의 여가 선용 및 체력증진으로 삶의 질 향상 도모와 관광 인프라

구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2017년

○ 위 치 : 청평면 청평리(청평댐 입구 ~ 청평 구역사 앞) 일원

○ 규 모 : L=1.28km, B=4.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,400		320	900	2,180
국 비
시 도 비
시군구비	3,400		320	900	2,180
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 철도시설공단과 폐철도 부지 및 철교 협의 진행 : ‘17. 1. 2. ~ ’17. 3. 5.

○ 폐철도 부지 유상사용허가 및 폐철교 매수신청 : ‘17. 3. 6.

○ 폐철교 용도폐지 요청(철도시설공단⇒국토교통부) : ‘17. 5. 26.

○ 폐철도 부지 유상사용허가 폐철도 매수 진행 : ‘17. 6. 15.

□ 향후계획

○ 제2회 추경 부족사업비 추가확보 : 500백만원

○ 폐철도 매수 완료 : ‘17. 9월

○ 1단계 사업(폐철교) 계약심사 실시 : ‘17. 9월

○ 공사 계약체결 및 착공 : ‘17. 10월

○ 공사 준공 : ‘17. 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

7080 청평고을 조성사업

담당자

관광사업단 은지혜

(☎580-4633)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체류형 도심관광 활성화 모델 제시로 지역 경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 10. ∼2019. 12.

○ 위 치 : 청평면 청평리 일원

○ 규 모 : 69,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	17,000	700	10,900	800	4,600
국 비	1,300	500		800
시 도 비
시군구비	7,800	200	3,000		4,600
지 방 채
민간자본
기 타	7,900		7,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ′17. 4. 25. 마스터플랜 수립용역 착수

□ 향후계획

○ ′17. 11. 실시설계 용역

○ ′18. 12. 공사 착공

○ ′19. 12. 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

복합건축물 신축

담당자

경제과 이창훈(☎580-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 효율적인 관용차량 관리, 사회초년생들을 위한 주거공간 및 지역주민에       체계적인 복지서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2016. 4.~ 2019. 9.

○ 위 치 :  가평읍 읍내리 608-5외 3필지

○ 규 모 :  연면적 11,987㎡(지상7, 지하2)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	22,300	3,500	-	1,400	17,400
국 비
시 도 비
시군구비	17,300	3,500		1,000	12,800
지 방 채
민간자본	5,000			400	4,600
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2016.4 : 가평군-경기도시공사 간 업무협약 체결

○ 2017.8 : 공공주택(행복주택)사업계획 승인 득(경기도)

□ 향후계획

○ 2017.9 : 공사 착공 및 기공식

○ 2019.9 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

어설픈연극제 개최

담당자

문화체육과 김성재(☎580-2501)

□ 사업목적 및 필요성

○ 커뮤니티 연극 기반으로 하여 이탈리아 비아레조 축제 컨텐츠인 거대인

형 퍼레이드를 도입하여 우리군 축제로 승화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020

○ 위 치 : 가평관내

○ 규 모 : 거대인형 퍼레이드(3종)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,733백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,450		290	290	870
국 비	580		116	116	348
시 도 비
시군구비	870		174	174	522
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016년 어설픈연극제 개최 : ‘16. 10. 15

□ 향후계획

○ 어설픈 연극제 평가 및 추진

사업명

설악 신천중앙로 전선지중화 사업

담당자

건설교통과 박윤선(☎580-2431)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 미관을 저해하고 보행에 불편을 주는 전선 및 통신선을 정비하여

쾌적한 도시환경 조성 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2017년

○ 위 치 : 설악면 신천리 터미널 ~ 회전교차로 구간

○ 규 모 : L=0.6km, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,400			2,400
국 비
시 도 비
시군구비	2,400			2,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016.  2. 12. : 전선지중화사업 승인(한전 경기북-457호)

○ 2016. 10. 11. : 2016년 지방재정 투자사업심사(적정)

○ 2016. 11. 11. : 배선선로 지중화공사에 따른 이행협약서 체결

○ 2017.  4. 10. : 공가 통신설비 지중화공사 시행협약서 체결

○ 2017.  4. 11. : 전선지중화사업 대행공사비 납부(1,417,226천원)

○ 2017.  4. 28. : 공가 통신설비 지중화공사 대행공사비 납부(787,240천원)

○ 2017.  5.  2. : 공가 통신설비 지중화공사 착공계 제출

○ 2017.  5. 26. : 전선 지중화공사 착공계 제출

○ 2017.  6. 14. : 설악 신천중앙로 전선지중화사업 주민설명회

○ 2017.  6. 23. : 설악 신천중앙로 전선지중화사업 주민설명회

□ 향후계획

○ 2017. 12. 20. : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

자라섬 서도 보행교 설치공사

담당자

관광사업단 정종경(☎580-2517)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자라섬과 남이섬 연결로를 조성하여 자라섬 방문객 유입을 극대화하고 다양한 콘텐츠와 스토리텔링을 접목시켜 주변 관광객들이 늘 찾는 새로운 명소로 널리 알려 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2018.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 달전리 648번지(자라섬 서도) 일원

○ 규 모 : 보행교 설치 L=145m, B=4.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,800				3,800
국 비	1,800				1,800
시 도 비
시군구비	2,000				2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 도시과에서 추진하는 가평읍 외곽순환도로(가평중로3-10호선, 북한강 제방도로) 개설사업 구간과 중첩되는 구간으로 견실한 사업 추진을 위해 도시과에서 원주지방국토관리청과 협의하여 가평읍 외곽순환도로 개설계획이 확정되면 이를 근거로 기본 및 실시설계용역을 발주하여 사업 추진 예정

□ 향후계획

○ ‘18. 03. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ ‘18. 06. ~ ’18. 09. : 행정절차이행(하천점용허가 및 관련법 협의 등)

○ ‘18. 10. ~ ’19. 06. : 사업추진 및 완료

사업명

자라섬 야간관광활성화사업

담당자

관광사업단

노용호(☎580-2508)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자라섬의 공간재창출과 체류형 야간경관조명 설치로 방문객유치기여 및       지역경제 활성화 기여(주․야간관광 상품개발이 관광경쟁력 확보의 관건이

되고 있는 추세)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.5. ~ 2017.10.

○ 위 치 : 가평읍 달전리 자라섬 남도

○ 규 모 : 약 300,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계
국 비
시 도 비	2,000			2,000
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○‘17.8.09 기본 및 실시설계용역 최종보고완료

○‘17.8.16 경기도 경관심의위원회 심의통과(조건부)

□ 향후계획

○‘17.8월말 중 심의결과 수정반영하여 경기도 최종설계자료 제출예정

○‘17.9월 초 시공예정

□ 사업변경 내역

○ 변경내용 없음

사업명

가평장학관 건립 리모델링 공사

담당자

평생교육사업소박현석(☎580-2472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대학교 밀집지역인 서울지역에 가평장학관을 건립하여 학습환경 개선 및

교육비 부담 경감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2018. 2월

○ 위 치 : 서울시 성북구 안암동 134-68번지 일원

○ 규 모 : 부지 787㎡, 건축연면적 1,933.11㎡(지상5층 2동)

○ 내 용 : 기존 다가두, 다세대 주택 건물을 매입하여 장학관으로 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	10,920	0	120	10,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2017. 1월 ~ 4월 : 부지 및 건물 매입

○ 2017. 2월 ~ 6월 : 리모델링 실시설계 용역

○ 2017. 7월 : 설계심사 및 공사계약

○ 2017. 8월 : 리모델링 공사착공

□ 향후계획

○ 2018. 2월 : 리모델링 공사준공

○ 2018. 3월 : 장학관 운영

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 10,065백만원, 변경 10,920

- 실시설계결과 시설비 및 자산취득비 등 사업비 증액