사업명

가평 뮤직빌리지 조성사업

담당자

관광사업단 이진어

(☎031-580-4631)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재즈축제, 자라섬, 남이섬 등 우수한 관광자원과 연계한 문화기반 관광인프라 구축으로 침체된 지역의 경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ∼ 2018. 6.

○ 위 치 : 가평읍 대곡리 148-3일원( 구 가평역사)

○ 규 모 : 37,257㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,694백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	40,694	17,300	10,500	3,879	9,015
지 방 채	8,000		8,000
국 비	500		500
시 도 비	2,720				2,720
시군구비	16,727	7,300	2,000	2,332	5,095
기 타	12,747	10,000		1,547	1,200

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2017. 1. 5. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 6. 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초						변 경						변경사유
사업비 (억원)	계	국	도	특	시군	기타	계	국	도	특	시군	기타	실시설계 반영
	230			100	130		406	5	27	100	167	107

사업명

가평역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 박상민

(☎031-580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미 조성으로 인해 개발이 지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를 위해 기반시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 12

○ 위 치 : 가평읍 달전리 630-9 일원

○ 규 모 : 도로5개소(연장 1,053ｍ)와 주차장1개소(면적: 5,541㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	22,500		1,100	3,700	17,700
지방채(지역발전)	6,000		1,000		5,000
국 비
시 도 비
시군구비	12,800		100		12,700
기 타(통합)	3,700			3,700

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016. 6. 22. : 실시설계용역 준공

○ 2016. 11. 11. : 실시계획인가 고시

○ 2017. 3. 17. : 감정평가 완료

○ 2017. 4. : 토지 보상 추진 중

□ 향후계획

○ 2017. 8. : 제2회 추경 사업 반영

○ 2017. 9. : 제1단계 사업 추진

사업명

청평역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 박상민

(☎031-580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미 조성으로 인해 개발이 지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를 위해 기반시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1.~2020. 12

○ 위 치 : 청평면 청평리 375-1 일원

○ 규 모 : 도로 15개소(연장 : 2,060m), 주차장 2개소(면적 : 2,950㎡), 광장 1개소(면적 : 626㎡), 공원 1개소(면적 : 1,084㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	21,700		2,100	1,500	18,100
지방채(지역상생)	8,100		2,000		6,100
국 비
시 도 비
시군구비	12,100		100		12,000
기 타(통합관리)	1,500			1,500

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016. 6. 22. : 실시설계용역 준공

○ 2016. 11. 24. : 실시계획인가 고시

○ 2017. 3. 21. : 감정평가 완료

○ 2017. 4. : 토지 보상 추진 중

□ 향후계획

○ 2017. 8. : 제2회 추경 사업 반영

○ 2017. 9. : 제1단계 사업 추진

사업명

상천역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 박상민

(☎031-580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미 조성으로 인해 개발이 지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를 위해 기반시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1.~2020. 12

○ 위 치 : 청평면 상천리 1318-5 일원

○ 규 모 : 도로 8개소(연장 : 2,635m), 주차장 2개소(면적 : 11,045㎡), 광장 1개소(면적 : 9,835㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	21,700		2,100	800	18,800
지방채(지역상생)	8,900		2,000		6,900
국 비
시 도 비
시군구비	12,000		100		11,900
기 타(통합관리)	800			800

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016. 6. 22. : 실시설계용역 준공

○ 2017. 1. 31. : 실시계획인가 고시

○ 2017. 4. 27. : 감정평가 완료

○ 2017. 4. : 토지 보상 추진 중

□ 향후계획

○ 2017. 8. : 제2회 추경 사업 반영

○ 2017. 9. : 제1단계 사업 추진