개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

뮤직빌리지 조성

담당자

관광사업단 이범중(☎580-4631)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재즈축제, 자라섬, 남이섬 등 우수한 관광자원과 연계한 문화기반 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 10.

○ 위 치 : 가평읍 대곡리 148-3번지 일원(구 가평역사)

○ 규 모 : 37,257㎡, 건물 6개동 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,694백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	40,694	27,800	4,879	8,015
특별교부세	500	500
특별조정교부금	10,000	10,000
도비	1,870			1,870
시군구비	17,777	9,300	3,332	5,145
지 방 채	8,000	8,000
기 타	2,547		1,547	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2015. 04. 22. ~ 2017. 01. 13. 도시개발사업 구역지정 및 실시설계용역 추진

○ 2017. 01. 05. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 10. 공사 준공

○ 2019. 01. ~ 위탁 운영

□ 사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업규모	A-32,593㎡, 건물 6개동(연면적 4,945㎡)	A-37,257㎡, 건물 6개동(연면적 5,166㎡)	실시설계 결과에 따른 변경
총사업비	39,900백만원	40,694백만원
사업기간	2015. 1. ~ 2018. 6.	2015. 1. ~ 2018. 10.
수요예측	방문객수 450천명(’25년 기준)	좌동	-

사업명

가평군 다목적 체육문화 복합센터

담당자

문화체육과 이선명

(☎580-2504)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 가평군 1명당 체육시설 면적도 3.09㎡로 문화체육관광부 권장 체육시설 면적(1명당 5.7㎡)의  54%에 해당하여 매우 부족함

◦ 청평면은 가평군의 서남부에 위치하고, 철도·도로 등 교통환경이 발달하여 주민 접근성이 좋아 가평군 주민들이 많이 이용할 수 있는 지역으로 이지역에 다목적 체육·문화 복합센터를 건립하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘16년 1월 ~ ’19년 6월

○ 위 치 : 경기도 가평군 청평면 청평리 333-13번지

○ 규 모 : 지하2층/지상5층(부지면적 4,582㎡, 연면적 7,276㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  18,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	18,600	3,450	5,000	5,608	4,542
국 비	4,500	1,035	1,200	2,265	-
시 도 비
시군구비	12,400	2,415	2,800	2,643	4,542
지 방 채
민간자본
기 타	1,700		1,000	700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35 %)

○ 기본 및 실시설계 착수 : 2016. 05. 03.

○ 지방재정 투자심사 승인 : 2016. 06. 09.

○ 공사착공 : 2017. 04. 28.

○ 지상 1층 골조공사 완료 : 2018. 06. 23.

□ 향후계획

○ 잔여분(조경, 마감) 공사 발주 : 2018. 09~10월

○ 1차분 공사완료 : 2018. 10월

○ 공사 준공(전체분) : 2019. 06월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 변경

- 당초 : 지하1층/지상3층(연면적:6,500㎡)

- 변경 : 지하2층/지상5층(연면적:7,276㎡)

○ 총사업비 변경

- 당초 : 155억(공사비 122, 용역비 7.7, 시설부대비 0.3, 토지비 25)

- 변경 : 186억(공사비 153, 용역비 7.7, 시설부대비 0.3, 토지비 25)

○ 사업기간 변경

- 당초 : ‘16년  1월 ～ ’18년  12월 ( 3년 )

- 변경 : ‘16년  1월 ～ ’19년  6월 ( 3년 )

사업명

설악면 LPG 배관망 사업

담당자

일자리경제과  장상건(☎580-2271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시가스 공급이 불가능한 설악면 지역의 에너지 복지를 위해 LPG 배관

망 사업을 통한 서민 경제 완화로 주민들의 복지증진 및 지역균형 발전

도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1 ~ 2018. 12

○ 위 치 : 설악면 7개지역(신천1리~4리, 선촌1리~2리, 창의리)

○ 규 모 : L=21.4㎞, 저장탱크 6개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000(백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	16,000		4,824	11,176
국비(기금)	4,192		1,824	2,368
시 도 비	7,000		1,500	5,500
시군구비	3,208		1,500	1,708
지 방 채
민간자본
기 타	1,600			1,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 51 %)

○ 신천4리(40세대), 선촌1리(102세대) 사업완료 및 가스공급

○ 선촌2리(탐선, 장돌마을), 신천1·2·3리 사업 추진 중

□ 향후계획

○ 신천1·2·3리 가스공급 저장탱크 설치위치 선정

○ 창의리 사업시공자 및 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가평분뇨처리공공시설개선사업

담당자

하수도사업소 정재헌

(☎580-4462)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가축분뇨 발생량은 증가하고 하수도 보급률 확대로 분뇨의 발생량은 감소 추        세에 따라 동 처리시설을 개선하여 축산농가의 소득 증대 및 환경보전에 기여        하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.07.02. ~ 2019.11.31.

○ 위 치 : 경기도 가평군 조종면 조종내길 57

○ 규 모 : 시설용량 140㎥/일

기존(㎥/일)			변경(㎥/일)
합 계	가축분뇨	분뇨	합계	가축분뇨	분뇨
140	20	120	140	95	45

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계		375	5,545
국 비		300	4,436
시 도 비		15	222
시군구비		15	222
지 방 채
민간자본
기 타		45	665

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○‘16. 03. : 위·수탁협약 체결(가평군↔공단)

○‘18. 03. : 기본 및 실시설계 용역 준공

○‘18. 07. : 시설공사 계약 및 착공

□ 향후계획

○ ‘19. 07. : 시설공사 완료 및 시운전(4개월)

○ ‘19. 11. : 시설공사 준공

사업명

북면 생활체육공원 조성사업

담당자

문화체육과 이근용(☎580-2503)

□ 사업목적 및 필요성

○ 읍ㆍ면 단위 생활체육공원을 조성함으로서 생활체육활성화를 도모하고 군민들의 휴식, 문화, 체육활동 등 건전한 여가활동으로 군민화합과 복지증진에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 가평군 북면 목동리 927-1번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 36,302㎡(축구장 1면, 야구장 1면, 멀티코트 1면, 부대시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,450	470	500	1,000	5,480
국 비	1,080				1,080
시 도 비
시군구비	6,370	470	500	1,000	4,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○군관리계획(체육시설) 변경 및 지형도면 결정고시: 2018.1.31.

○편입 토지 보상 진행중  *(6필지 / 9,431㎡) 완료

□ 향후계획

○ 보상 미 협의 토지 수용재결 : 2019. 09.

○ 공사 착공 및 준공 : 2020. 03. ~ 2021. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 부지조정에 따른 사업규모 축소(37,951㎡→36,302㎡), 토지 보상 및 실시설계에 따른 사업비 증가, 사전행정절차 및 예산에 따른 사업기간 연장

사업명

북면 행정복지센터 신축

담당자

회계과 이종관(☎580-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북면행정복지센터의 신축으로 행정능률 향상 및 주민들의 편의를 도모하고, 문화ㆍ복지공간 확대에 따라 주민들의 삶의 질 향상과 지역공동체 형성의 구심적 역할 수행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10. ~ 2019. 1.

○ 위 치 : 가평군 북면 목동리 913-4번지 외 3필지

○ 규 모 : 신축공사 1식(연면적 2,463.11㎡/지하1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,526 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	5,526		5,526
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  38%)

○북면행정복지센터 신축공사 동절기 공사 중지 후 재착공: 2018. 3.

○추가예산 확보로 기존 1,2차분 공사를 총차분으로 변경: 2018. ４.

○터파기공사 완료 및 골조공사 진행중 : 2018. 8.

□ 향후계획

○ 책상 등 가구구입에 따른 추가예산 확보(2회추경) : 2018. 9.

○ 골조공사 완료 : 2018. 9.

○ 공사 준공: 2019. 1.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

청평도시계획도로(중로1-4호선)개설공사

담당자

도시과송길호(☎580-2371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경춘선 복선전철의 개통에 따른 신역사~시가지간 효율적 교통체계 구축 및 북한강 자전거도로 연결에 따른 상습적인 교통정체 해소

○ 장기미집행 도시계획도로 개설로 재산권 제한에 따른 장기적인 민원해소 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ~ 2018년 12월

○ 위 치 : 청평역 ~ 청평교

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 – L=850m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,500	1,453	1,397	4,650
국 비
시 도 비
시군구비	7,500	1,453	1,397	4,650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2015. 11. : 실시설계용역 완료

○ 2015. 12. ~ 2017. 03. : 편입 토지 및 지장물 보상협의 완료

○ 2017. 04. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간

- 당초 : 2015. 05. ~ 2017. 12.

- 변경 : 2015. 05. ~ 2018. 12.

사업명

문화도시 조성사업

담당자

문화체육과 최윤정(☎580-2957)

□ 사업목적 및 필요성

○ 커뮤니티 연극 기반으로 하여 거대인형 거리퍼레이드를 통한 축제 컨텐       츠에서 지역주민이 직접참여 할 수 있는 다양한 프로그램의 외연확대를       통해 지역내 문화향유기회 제공 및 연극을 통한 치유와 화합의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020

○ 위 치 : 가평관내

○ 규 모 : 문화창작공간 운영 및 커뮤니티 연극프로그램 개발, 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,477백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,477	500	445	532	1,000
국 비	978	200	178	200	400
시 도 비				16
시군구비	1,483	300	267	316	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 생활연극 37회

○ 문화창작공간 준공 : 2017.07.

○ 커뮤니티연극동아리 4개 지원

□ 향후계획

○ 월간연극 추진

○ 커뮤니티연극동아리 지원사업

○ 문화창작공간 운영

○ 경기연극올림피아드 대회 개최

사업명

가평 공설(공동)묘지 재개발사업

담당자

행복돌봄과 김기철(☎580-2233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 날로 늘어나는 화장수요에 적극 대처하여 묘지 수급의 안정을 기하고,

기존 공동묘지의 혐오 이미지를 탈피하여 주민과 친숙한 공간으로 재개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 2

○ 위 치 : 가평읍 읍내리 산125번지 일원

○ 규 모 : A=16,181㎡(공동묘지 12,012㎡  진입도로 4,169㎡)

- 자연장지(잔디형, 수목형) 및 봉안시설(봉안담), 공원, 편의시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000	1,345	1,620	2,035
국 비	1,389	500	434	455
시 도 비	89	32	28	29
시군구비	3,522	813	1,158	1,551
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2017. 5.  25 : 군관리계획결정 및 실시설계 완료

○ 2017. 10. 27 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2019. 2. 28 : 공사 완료

○ 2019. 3.    : 공설묘지 개장

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	사업규모	총사업비(백만원)	사업기간	비 고(변경사유)
당초	A=15,670㎡	3,951	2015.1 ~ 2017.12	대상지 지형을 고려한 실시설계결과 사업량 및 사업비 증가
변경	A=16.181㎡	5,000	2015.1 ~ 2019. 2

사업명

가평역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 이종국(☎580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미 조성으로 인해 개발이 지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를 위해 기반시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 달전리 630-9번지 일원

○ 규 모 : 도로5개소(L=1,053m), 주차장 1개소(A=5,541㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	22,500	1,100	3,700	2,900	14,800
지 방 채	3,600	1,000			2,600
국 비
시 도 비
시군구비	12,800	100		500	12,200
기 타(통합)	6,100		3,700	2,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2016. 11. : 실시계획인가 고시

○ 2017. 1. ~ 2018. 5. : 보상추진(1-1단계 완료)

○ 2018. 5. : 문화재 시굴조사용역 완료

○ 2018. 6. : 문화재 정밀발굴조사용역 착수

□ 향후계획

○ 2018.  9. : 문화재 정밀발굴조사용역 준공

○ 2018.  9. : 공사발주(1-1단계)

사업명

청평역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 이종국(☎580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미 조성으로 인해 개발이 지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를 위해 기반시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 가평군 청평면 청평리 375-1번지 일원

○ 규 모 : 도로 15개소(연장 : 2,060m), 주차장 2개소(면적 : 2,950㎡),

광장 1개소(면적 : 626㎡), 공원 1개소(면적 : 1,084㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	21,700	2,100	1,600		18,000
지 방 채	8,100	2,000			6,100
국 비
시 도 비
시군구비	12,100	100	100		11,900
기 타(통합)	1,500		1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2016. 11. : 실시계획인가 고시

○ 2017. 1. ~ 2018. 1. : 보상추진(1-1단계 완료)

○ 2017. 12. : 문화재 표본조사용역 완료

○ 2017. 12. : 공사 착공(1-1단계)

○ 2018. 6. : 청평역세권 지반조사용역 착수

□ 향후계획

○ 2018. 7. : 청평역세권 지반조사용역 준공

○ 2018. 12. : 공사준공(1-1단계)

사업명

상천역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 이종국(☎580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미 조성으로 인해 개발이 지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를 위해 기반시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 가평군 청평면 상천리 1318-5번지 일원

○ 규 모 : 도로 8개소(연장 : 2,635m), 주차장 2개소(면적 : 11,045㎡),

광장 1개소(면적 : 9,835㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	21,700	2,100	900	200	18,500
지 방 채	8,900	2,000			6,900
국 비
시 도 비
시군구비	12,000	100	100	200	11,600
기 타(통합)	800		800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2016. 11. : 실시계획인가 고시

○ 2017. 1. ~ 2018. 1. : 보상추진(1-1단계 완료)

○ 2018. 2.~5. : 문화재 정밀발굴조사용역 완료

○ 2018. 3. : 공사 착공(1-1단계)

□ 향후계획

○ 2018. 12. : 공사준공(1-1단계)

사업명

설악도시계획도로(중2-2)개설

담당자

도시과송길호(☎580-2371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서울-춘천고속도로 개통에 따른 설악시가지간 효율적 교통체계 구축 및 균형있는 지역개발과 주변 상권 경제 활성화에 도모

○ 장기미집행 도시계획도로 개설로 재산권 제한에 따른 장기적인 민원해소 및 주민편익 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ~ 2020년 12월

○ 위 치 : 설악버스터미널 ~ 신천리 367-4번지 일원(신천중앙로)

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 - L=602m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원(공사비 2,000백만원, 보상비 4,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,000
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	58	414	2,610	2,918
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2017. 01. ~ 2018. 07. : 편입 토지 및 지장물 보상협의(90% 추진)

□ 향후계획

○ 2018. 12. : 편입 토지 및 지장물 보상협의 완료

○ 2019. 03. ~ 2020. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 당초-2016. 01. ~ 2018. 12., 변경 – 2016.01. ~ 2020.

○ 총사업비 : 당초 – 5,600백만원, 변경 – 6,000백만원

사업명

청평도시계획도로(중로3-14호선 외1)개설공사

담당자

도시과송길호(☎580-2371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경춘선 복선전철의 개통에 따른 신역사~안전유원지간 효율적 교통체계 구축 및 자전거도로 중복사용에 따른 상습적인 교통정체 해소

○ 장기미집행 도시계획도로 개설로 재산권 제한에 따른 장기적인 민원해소 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 11월 ~ 2018년 12월

○ 위 치 : 청평역 ~ 안전유원지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 – L=173m, B=6~12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,805백만원(공사비 400백만원, 보상비 1,405백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,805	596	668	541
국 비
시 도 비
시군구비	1,805	596	668	541
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2015. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2016. 01. ~ 2018. 02. : 편입 토지 및 지장물 보상협의 완료

○ 2018. 12. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 09. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 당초 - 2016. 11. ~ 2017. 12., 변경-2016. 11. ~ 2018. 12.

○ 총사업비 : 당초 – 2,200백만원, 변경 – 1,805백만원.

사업명

북한강 자전거길 개선공사

담당자

건설과 염한식(☎580-2427)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북한강 및 남양주시, 가평군, 춘천시의 수려한 자연경관을 향유할 수 있는        광역자전거길 조성으로 경기도 그린웨이 기본계획과 연계함은 물론 국민의        건강증진, 지역주민의 정서 안정 및 쾌적한 환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020년

○ 위 치 : 청평면 청평리(청평댐 입구 ~ 청평구역사 앞) 일원

○ 규 모 : L=1.28km, B=4.5m(폐철교 L=142m, B=4.3~4.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,400	720	400	500	1,780
국 비	1,390				1,390
시 도 비
시군구비	2,010	720	400	500	390
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2014. 11. 13. : 폐철교 활용 자전거도로(인도) 설치 방침결정

○ 2014. 12. 30. : 실시설계용역 완료

○ 2015. 8월 ~ 2016. 2월 : 한국철도시설공단(수도권 본부) 협의 실시

○ 2016. 2월 ~ 2017. 3월 : 한국철도시설공단(수도권 본부) 협의 실시

⇒ 자전거도로 개설을 위한 군관리계획시설 결정은 한국철도시설공단의 재산관리 방침과 불 부합, 군관리계획시설 미결정 및 원형상태 사용(자전거도로 등 영구시설물 설치 불가)

○ 2017. 03. 22. : 1단계사업 구간 국유재산 사용허가 및 폐철교 매수 신청

⇒ 1단계사업 : 폐철교 활용 인도(자전거도로) 설치 L=145.0m

○ 2017. 08. 22. : 폐철교 감정평가 실시

○ 2017. 09. 29. : 1단계사업 일상감사 및 계약심사 완료

○ 2017. 10. 13. : 폐철교 매매계약 체결

○ 2017. 11. 03. : 1단계사업 계약체결 및 공사착공

○ 2018. 06. 14. : 1단계사업 완료 및 개통

사업명

청평고을 조성

담당자

관광사업단 은지혜(☎580-4633)

□ 사업목적 및 필요성

○ 불법시설 난립, 지역 랜드마크 부재로 낙후된 청평지역을 체류형 도심 관광모델로 제시하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 8. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 청평면 청평리 일원

○ 규 모 : 5개 구역 7개 단위사업

- (구)청평역사 : 메인광장 A=14,113㎡, 테마트레인 A=8,768㎡

- 중앙내수면연구소 저수지 : 자연생태문화공원 A=31,058㎡

- 폐선로 : 7080테마 문화시설 A=14,033㎡(민간조성), 주차장 A=7,102㎡

- 연계도로 : 특화가로 조성 L=600m

- 호명산 진입로 : 교량 설치 L=93.0m(추진중)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	40,000	11,600	1,405	2,720	24,275
특별교부세	1,300	500	800
특별조정교부금	7,900	7,900
시군구비	17,800	3,200	605	2,720	11,275
민간자본	13,000				13,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 02. 19. 호명산 진입로 교량 설치공사 착공

○ 2018. 06. 01. 청평고을 조성 마스터플랜 용역 완료

□ 향후계획

○ 2018. 08. ~ 2019. 03. 청평역세권(청평지구) 지구단위계획 변경용역 추진

○ 2019. 03. ~ 2019. 12. 기본 및 실시설계용역 추진

○ 2020. 01. ~ 2020. 12. 공사 추진

□ 사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업규모	4개 구역 6개 단위사업	5개 구역 7개 단위사업	마스터플랜 수립에 따른 변경
총사업비	17,000백만원	40,000백만원
사업기간	2016. 8. ~ 2019. 12.	2016. 8. ~ 2020. 12.
수요예측	방문객수 450천명(’26년 기준)	방문객수 1,215천명(’25년 기준)

사업명

복합건축물(행복주택)신축공사

담당자

회계과 이종관(☎580-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회초년생과 주거약자를 위한 주거공간 제공 등 지역주민에게 체계적인 복지서비스를 제공하고, 효율적인 관용차량 관리 및 적정한 사무공간 배치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2019. 4.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 읍내리 608-5 외 3필지

○ 규 모 : 신축공사 1식(연면적 11,987㎡/지상7층, 지하2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  20,971 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	14,771	3,000	1,000	1,000	9,771
지 방 채
민간자본
기 타	6,200		6,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  47%)

○경기도시공사 업무협약 체결: 2016. 4. 27.(수)

○복합건축물(행복주택) 세부협약을 위한 1차 협의: 2018. 3.

○복합건축물(행복주택) 사업비 (3,000백만원) 2차 교부: 2018. 4.

□ 향후계획

○ 복합건축물(행복주택) 가평군 요구사항 요청 및 협의(2차) : 2018. 9.

○ 복합건축물(행복주택) 청사부분 가구구입을 위한 예산확보 : 2018. 9.

○ 복합건축물(행복주택) 사업비 3차 교부: 2018. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

자라섬 음악경연대회

담당자

문화체육과 김상일(☎580-4231)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내외 음악계에서 성공할 수 있는 수준의 입상자들을 배출 및 발굴하여

음악도시 가평 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 9월

○ 위 치 : 가평읍 가평문화예술회관

○ 규 모 : 온라인심사 1회, 예선심사 2회, 본선심사 1회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	550	251	149	150	-
국 비
시 도 비
시군구비	540	250	140	150	-
지 방 채
민간자본
기 타	10	1	9

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 온라인 심사 (연주자, 싱어송라이터 각 16개팀 선발) : 2017. 9. 4 ~ 9. 8.

○ 예선 심사 (연주자 8팀, 싱어송라이터 8팀 선발) : 2017. 9. 9, 9. 15,

○ 본선 심사 (연주자 1팀, 싱어송라이터 3팀 선발) : 2017 9.14, 9.30

□ 향후계획

○ 제3회 자라섬 음악경연대회 예선심사(8팀 선발) : 2018. 8. 25.

○ 제3회 자라섬 음악경연대회 본선심사(3팀 선발) : 2018. 9. 15.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

설악 신천중앙로 전선지중화사업

담당자

건설과 박상민(☎580-2431)

□ 사업목적 및 필요성

○ 설악 신천중앙로의 쾌적하고 살기좋은 가로환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 10. ~ 2018. 9.

○ 위 치 : 설악면 신천중앙로(버스터미널 ~ 회전교차로)

○ 규 모 : L=0.6㎞, B=12m(왕복 2차선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,850		2,400	450
국 비
시 도 비
시군구비	2,850		2,400	450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2016. 11. 16. : 설악 신천중앙로 전선지중화 사업(전기) 협약체결

○ 2017.  4. 10. : 설악 신천중앙로 전선지중화 사업(통신) 협약체결

○ 2017.  6. 12. : 주민설명회 개최 ○ 2017. 9. : 공사착수

○ 2018.  4. 13. : 포장복구 완료   ○ 2018. 7. 18. : 가공전선 및 변압기 철거

□ 향후계획

○ 2018.  9. : 전주 공가통신설로 철거 및 사업완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경(2,400백만원 → 2,850백만원) 증)450백만원

→ 주민설명회 개최결과 반영에 따라 야간공사시행으로 사업비 야간 할증에

의한 증가

사업명

가평도시계획도로(소로2-37호선외3)개설공사

담당자

도시과김형균(☎580-2372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가평도시지역 내 개발여건이 점차적으로 증가함에 따라 효율적인 교통체계 구축을 위한 도시계획도로 개설이 필요한 실정임

○ 이에 가평도시계획도로 소로2-37호선외 3개소를 개설함으로써 도서관신축에 따른 교통의 원활한 소통 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ~ 2019년 12월

○ 위 치 : 교육지원청 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 - L=406m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원(공사비 600백만원, 보상비 2,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,600			1,300	1,300
국 비
시 도 비
시군구비	2,600			1,300	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016. 08. : 실시설계용역 완료

○ 2018. 01. ~ 2018. 08. : 편입 토지 및 지장물 보상협의(50% 추진)

□ 향후계획

○ 2019. 02. : 편입 토지 및 지장물 보상협의 완료

○ 2019. 03. ~ 2019. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가평도시계획도로(중로1-1호선)개설공사

담당자

도시과김형균(☎580-2372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가평도시지역 내 개발여건이 점차적으로 증가함에 따라 효율적인 교통체계 구축을 위한 도시계획도로 개설이 필요한 실정임

○ 이에 가평도시계획도로 중로1-1호선 개설함으로써 원활한 소통 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ~ 2019년 3월

○ 위 치 : 뮤직빌리지 일원(운동장사거리 ~ 군청차고지)

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 – L=400m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,400백만원(공사비 3,400백만원, 보상비 3,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,400		1,243	5,157
국 비
시 도 비
시군구비	6,400		1,243	5,157
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2016. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2017. 01. ~ 2018. 02. : 편입 토지 및 지장물 보상협의 완료

○ 2018. 03. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2019. 06. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 - 4,000백만원, 변경–6,400백만원

○ 사업기간 : 당초 – 2016. 06. ~ 2018. 12. , 변경 – 2016. 06. ~ 2019. 06.

사업명

목동도시계획도로(중로2-1호선외 2)개설공사

담당자

도시과송길호(☎580-2371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목동도시지역 내 도시구역으로 주거지역과 면사무소, 소방서 등 관공서가 인접하였고 국도변 마트를 이용하는 이용객 및 행락객이 점차적으로 증가하여 항시 정체로 계속적인 민원사항이 발생하는 지역으로 효율적인 교통체계 구축을 위한 도시계획도로 개설이 필요한 실정임

○ 이에 목동도시계획도로 중로2-1호선 외 2개소를 개설함으로써 도시지 내 교통의 원활한 소통 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ~ 2019년 12월

○ 위 치 : 하나로마트 ~ 면사무소 뒤

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 – L=431m, B=8~10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원(공사비 800백만원, 보상비 1,300백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,100	2	464	1,384	250
국 비
시 도 비
시군구비	2,100	2	464	1,384	250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2017. 02. : 실시설계용역 완료

○ 2017. 02. ~ 2018. 07. : 편입 토지 및 지장물 보상협의 중

○ 2017. 11(1공구) : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 10. : 공사 준공(1공구)

○ 2018. 12. : 편입토지 및 지장물 보상협의 완료

○ 2019. 12. : 전 구간 공사 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

설악도시계획도로(소로3-24호선)개설공사

담당자

도시과송길호(☎580-2371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사룡리 용문마을로 진입하는 군계획시시설 도시계획도로로서 사룡리 용문마을 주민과 GS칼텍스 연구소에서 진입도로 확장 요청한 사항으로 기존 도로 폭이 좁아 차량 교행 시 사고 위험이 있고, 용문마을 지역개발로 인한 입주민 증가로 인하여 차량 통행이 현저하게 증가하고 있는 실정임

○ 이에 설악도시계획도로 소로3-24호선을 개설함으로써 수혜가구 주민들의 주거환경 정비 및 원활한 교통 대책 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ~ 2019년 12월

○ 위 치 : GS칼텍스 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 – L=2,101m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원(공사비 800백만원, 보상비 1,300백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,800	68	30	1,350	1,352
국 비
시 도 비
시군구비	2,800	68	30	1,350	1,352
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2017. 1. ~ 2018. 7. : 편입 토지 및 지장물 보상협의(30% 추진)

□ 향후계획

○ 2019. 2. : 편입 토지 및 지장물 보상완료

○ 2019. 3. ~ 2019. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초-2,100백만원, 변경-2,800백만원

○ 사업규모 : 당초-L=2,010m, 변경-2,516m

사업명

설악도시계획도로(중로3-9호선외2)개설공사

담당자

도시과송길호(☎580-2371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 설악도시지역 내 지구단위계약구역으로 지정된 곳으로서 주거지역과 설악I.C가 인접하여 개발여건이 점차적으로 증가함에 따라 효율적인 교통체계 구축을 위한 도시계획도로 개설이 필요한 실정임

○ 이에 설악도시계획도로 중로3-9호선 외 2개소를 개설함으로써 주택지 내 가구간 원활한 소통 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ~ 2020년 12월

○ 위 치 : 신천2리 마을회관~고기본부

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 – L=500m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원(공사비 2,000백만원, 보상비 4,000백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,000	60	483	800	4,667
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	60	483	800	4,657
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016. 06. : 실시설계용역 완료

○ 2017. 01. ~ 2018. 07. : 편입 토지 및 지장물 보상협의(40% 추진)

□ 향후계획

○ 2019. 06. : 편입 토지 및 지장물 보상완료

○ 2019. 07. ~ 2020. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간

- 당초 : 2016년 1월 ~ 2019년 12월

- 변경 : 2016년 1월 ~ 2020년 12월

□ 향후계획

○ 2018.  8월 ~ 12월 : 한국철도시설공단 폐철도 부지 매수 등 협의

○ 2018.  9월 : 재설계용역 착수

○ 2018. 12월 : 재설계용역 완료

○ 2019.  1월 : 2019년 본예산에 폐철도 부지 매입비 확보

○ 2019.  5월 : 군관리계획 변경 결정 및 국유재산 용도폐지

○ 2019.  6월 : 폐철도 부지 협의(매수) 완료

○ 2019.  7월 : 연차별, 단계별 사업 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간

․ 당    초 : 2016년 ~ 2018년

․ 변    경 : 2016년 ~ 2020년

․ 변경사유

- 폐철도 부지 관리기관인 한국철도시설공단과(수도권본부)과 폐선부지에    대한 무상사용을 수차례 협의하였으나

- 한국철도시설공단에서는 “자전거도로 개설을 위한 군관리계획시설 결정은 한국철도시설공단의 재산관리 방침과 불부합하며, 군관리계획시설 미결정 및 원형형태 사용(자전거도로 등 영구시설물 설치를 목적으로 불가)으로 유싱임대 가능하고, 폐선부지 전필지 매수조건”을 주장함에 따라 폐철도 부지 협의지연에 따른 사업기간 변경

사업명

자라섬 야간관광 인프라 조성

담당자

관광사업단 정종경(☎2517)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자라섬 야간관광 활성화를 위한 다양한 경관조명, 빛 관련 콘텐츠를

조성하여 지역방문객의 체류와 체재를 높이고 지역관광산업 발전 및

지역경제 활성화를 위해 추진하는 사업임

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 자라섬 일원

○ 규 모 : 경관조명 A=114,050㎡

(고보조명, 레이저조명, 투광등, 보안등, 볼라드등, 음향시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000		30	1,970
국 비
시 도 비	1,000		15	985
시군구비	1,000		15	985
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2017. 06. 02 : 야간관광 활성화사업 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2017. 09. 12 : 경기도 경관심의 완료

○ 2018. 02. 01 : 하천점용허가 완료(원주지방국토관리청)

○ 2018. 03. 20 : 경기도 계약심사 완료

○ 2018. 03. 26 : 야간관광 인프라 조성 사업 착공

○ 2018. 04. 16 : 야간관광 활성화사업 착공

○ 2018. 05. 16 : 야간관광 인프라 조성 사업 준공

○ 2018. 06. 01 : 관급자재 구매 구입 계약 체결

□ 향후계획

○ 2018. 08. : 야간관광 활성화 사업 추가사업 착공

○ 2018. 10. : 야간관광 활성화 사업 전체사업 준공

사업명

가평군 장학관 건립 리모델링 공사

담당자

평생교육사업소 김상규(☎02-927-7186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대학교 밀집지역인 서울지역에 가평장학관을 건립하여 학습환경 개선 및      교육비 부담 경감

□ 사업개요

○ 기 간: 2017. 1월 ~ 2018. 2월

○ 위 치: 서울시 성북구 안암로9가길 73 일원

○ 규 모: 기존 다가구, 다세대 주택 건물을 매입하여 장학관으로 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 11,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	11,050	-	8,693	2,357	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 2017. 1월 ~ 4월: 부지 및 건물 매입

○ 2017. 2월 ~6월: 리모델링 실시설계 용역

○ 2017. 7월: 설계심사 및 공사계약

○ 2017. 8월: 리모델링 공사 착공

○ 2018. 2월: 리모델링 공사 준공

□ 향후계획

○ 2018. 3월 ~ : 장학관 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비: 당초 10,920 백만원, 변경 11,050백만원

- 실시설계 결과 시설비 증액