개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

가평군 가평문화원 건립

담당자

문화체육과 문민정(☎580-2061)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가평군의 문화를 대표하는 (사)가평문화원의 독립원사를 건립하여 가평       군민의 문화에 대한 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 3. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 대곡리 350번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 1,349㎡, 연면적 2,043.24㎡(지상3층/지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,260백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	5,260	230	220	4,810
특별교부세
특별조정교부금	2,012			2,012
도비
시군구비
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

ㅇ 2018. 1.~3. : 지방분화원 시설비 지원사업 사전평가 신청

ㅇ 2018. 3.~12. : 군관리계획 변경결정 및 실시설계용역 추진

ㅇ 2018. 9. : 국도비 보조사업 신청

□ 향후계획

ㅇ 2019. 3. ~ 2020. 12. : 공사착공 및 준공

사업명

가평잣고을 전통시장 내

복합건축물 조성

담당자

경제과 김민모(☎580-2276)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자라섬, 레일바이크, 남이섬(춘천), 뮤직빌리지, 아침고요수목원 등 주변       관광자원과 연계한 문화관광형 시장 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 가평군 보납로 34번길 16번지 일원(읍내리 405번지 일원)

○ 규 모 : 대지면적 3,526㎡, 건축면적 1,600㎡, 연면적  5,398㎡

(지하주차장 포함), 층수 지하1층~지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	10,700	4,500.0	1,200	5,000
특별교부세
특별조정교부금
도비	2,400	2,400
시군구비
지 방 채	400	400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

ㅇ 2018. 1. : '18년 제1차 지방재정 경기도 투자사업 심사의뢰

ㅇ 2018. 3. : 건축설계 디자인 공모 완료

ㅇ 2018. 11. : 기본 및 실시설계 완료

□ 향후계획

ㅇ 2018. 12. ~ '19. 12. : 공사착공 및 준공

사업명

군민의 날 및 읍면 체육대회 개최

담당자

문화체육과 원경원(☎580-2146)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민의 날 기념 읍면 대항 체육대회를 개최하여 주민간의 결속을 다지고       화합을 도모하며 타향에 나가있는 군민들에게도 대회 참가를 통해 애향       심을 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. ~ 2020. 10.

○ 위 치 : 가평군 일원

○ 규 모 : 개폐회식 행사(축하공연), 본 행사(체육대회)

부대행, 퍼포먼스 공연 및 가수 공연 / 읍면민 장기자랑

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	840		340	160	340
특별교부세
특별조정교부금
도비
시군구비	840		340	160	340
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

ㅇ 2017. 12. : 군민의 날 체육대회 기본계획 수립

ㅇ 2018. 3. ~ 10. : 읍면 관계자 회의

□ 향후계획

ㅇ 2018. 10. 8. : 군민의 날 체육대회 개최

ㅇ 2018. 12. : 체육대회 결과 보고 및 정산

사업명

제51회 가평군민의날

담당자

자치행정과 김준형(☎580-2113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민 모두가 하나된다는 의미를 담은 개막식, 퍼레이드, 군민대상 시상,       축하공연, 체육대회 등 다양한 프로그램을 운영하여 만족도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. ~ 2020. 10.

○ 위 치 : 가평군 일원

○ 규 모 : 본행사, 부대행사, 개폐회식 행사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	350		150	40	160
특별교부세
특별조정교부금
도비
시군구비	350		150	40	160
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

ㅇ'18. 4. : 제51회 군민의 날 기념행사 기본계획 수립(방침)

ㅇ'18. 5. : 기본계획 관련 실과소 및 읍면 실무회의 개최

ㅇ'18. 9. : 가평읍, 청평면 청사초롱 설치

□ 향후계획

ㅇ'18. 10. 8. : 군민의 날 체육대회 개최

ㅇ'18. 11. : 체육개회 결과 보고 및 정산

사업명

농어촌 도로 조종101호선 개설공사

담당자

건설교통과 염한식(☎580-2427)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 도로폭의 협소와 선형이 불량한 농어촌도로에 대한 확포장으로          차량의 안전사고 사전 방지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 2. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 가평군 조종면 대보리 338-2번지

○ 규 모 : 연장(L)=2.4km, 폭원(B)=8.0m(1차로→2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	6,000	200	1,100	2,000	2,700
특별교부세
특별조정교부금
도비
시군구비	6,000	200	1,100	2,000	2,700
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

ㅇ'18. 1. 2. : 사전재해영향성검토 용역 완료

ㅇ'18. 1. 16. : 사전재해영향성 협의 완료(가평군 안전재난과)

ㅇ'18. 2. : 도로구역 결정을 위한 행정절차 이행 완료

ㅇ'18. 3. 도로구역 결정 및 분할측량 실시

ㅇ'18. 4. : 편입토지 및 지장물 감정평가

ㅇ'18. 5. ~ 12. : 편입토지 및 지장물 보상협의

□ 향후계획

ㅇ'19. 1. : 계약심사 등 행정절차 이행

ㅇ'19. 3. ~ : 단계별 사업 추진

사업명

설악시외버스정류장 개설 공사

담당자

건설교통과 이교학(☎580-2297)

□ 사업목적 및 필요성

○ 설악면 현 시가지에 입지한 시외버스정류장은 노후하고 협소하여 시외        버스정류장으로서 제 기능을 하지 못하여 장래 여건변화에 부합한 부지       를 선정, 이전·신설하여 지역발전 효과를 극대화하고 주민들의 숙원을        해결하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 7. ~ 2020. 8.

○ 위 치 : 가평군 설악면 신천리 605번지 일원

○ 규 모 : 설악시외버스정류장 부지 및 진입도로

-부지 : 자동차 정류장 (3,452㎡)

-진입도로 : 폭(12~15m), 연장(320m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	3,400		1,600	1,300	500
일반국고
특별교부세
특별조정교부금
도비
시군구비	3,400		1,600	1,300	500
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 47%)

ㅇ'18. 2.~4. : 실시설계용역 착수

ㅇ'18. 4. ~ '19. 6. : 토지보상 감정평가 및 보상실시

□ 향후계획

ㅇ'18. 6. ~ '20. 8. : 공사착공 및 준공

사업명

가평도시계획도로 중로3-3 개설공사

담당자

도시과 전창영(☎580-2372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가평역, 자라섬 및 남이섬 주변 도로는 가평을 방문하는 관광객 증가로       인하여 상습적인 교통정체가 발생하는 지역으로 지역주민이 안전하고         편리한 생활을 영위할 수 있도록 도시계획도로를 개설하여 교통불편사항       을 해소하고 지역균형발전을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 달전리 398-1번지 일원

(가평역 삼거리~유성아파트)

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=455m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	5,800	100	3,000	2,000	700
일반국고	2,900		1,500	1,000	400
특별교부세
특별조정교부금
도비
시군구비	2,900	100	1,500	1,000	300
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

ㅇ'18. 1. ~ '18. 6. : 도시계획시설 실시계획인가

ㅇ'18. 1. ~ '19. 6. : 편입토지 및 지장물 보상협의

□ 향후계획

ㅇ'19. 6. ~ '19. 8. : 계약심사 및 공사업체 선정

ㅇ'19. 9. ~ '20. 12. : 공사착공 및 준공

사업명

가평도시계획도로 중로3-15 개설공사

담당자

도시과 전창영(☎580-2372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가평도시지역 내 개발여건이 점차적으로 증가함에 따라 효율적인 교통        체계 구축을 위한 도시계획도로 개설이 필요한 실정으로 가평도시계획        도로 중로3-15호선을 개설함으로써 교통불편사항을 해소하고 지역균형        발전을 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 가평읍 읍내리 423-1번지 일원

(가평교 ~ 계량교)

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1,377m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	9,000		2,500	2,500	4,000
일반국고
특별교부세
특별조정교부금
도비	4,200		2,100	2,100
시군구비	4,800		400	400	4,000
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

ㅇ 2018. 2. : 지역균형발전사업 변경신청(가평군→경기도)

ㅇ 2018. 5. : 지역균형발전사업 승인(경기도 →가평군)

ㅇ 2018. 3. ~ 9. : 실시설계용역 추진

ㅇ 2018. 10. ~ '19. 12. : 편입토지 및 지장물 보상협의

□ 향후계획

ㅇ 2020. 1. ~ '20. 2. : 계약심사 및 공사업체 선정

ㅇ 2020. 3. ~ '21. 12. : 공사착공 및 준공

사업명

구역사 일원 도시재생 사업

담당자

도시과 이근용(☎580-2462)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구 도심권 상권활성화 및 노후주거환경개선사업, 문화공간조성, 복합커뮤       니티 공간 조성으로 일자리 창출 및 공동체 지원 활성화로 지역경제          활성화에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 읍내7리, 대곡 1·3리(구역사 일원)

○ 규 모 : 재즈문화거리 L=502m

복합커뮤니티센터 조성(구 가평중앙도서관 리모델링)

·건축연면적 836.62㎡(지하 111.02㎡, 1층 365.6㎡, 2층 360㎡)

녹색길 및 쌈지공원 조성, 문화플랫폼 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,797백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	9,797	2,980	6,780	37
일반국고
특별교부세
특별조정교부금
도비	8,330	2,540	5,760	30
시군구비	1,467	440	1,020	7
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

ㅇ 2018. 3. : 구역사 주변지역 활성화 방안 수립용역 준공

ㅇ 2018. 4. : 커뮤니티센터, 녹색길 및 쌈지공원 조성관련 설계용역 착수

□ 향후계획

ㅇ 2019. 12. : 구역사 일원 도시재생관련 사업 종료

사업명

조종 청소년 문화의집

담당자

평생교육사업소 박현석(☎580-2472)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 청소년문화의집은 청소년 전용 복합문화공간으로 청소년들의 문화적          요구에 따른 다양한 영역의 문화 활동 기획과 실행과정에서의 참여기회       를 제공하는 시설로 ‘16년 기준 경기통계에 따르면 31개 시·군에 53개소       를 설치·운영하고 있으며, 남부지역 44개소, 북부지역 9개소로 남부지역       에 치중되어 북부지역의 시설 확충이 시급한 실정임

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 5. ~ 2020. 5.

○ 위 치 : 조종면 현리 410-6번지

○ 규 모 : 부지면적 2,190㎡, 연면적 2,200㎡(지상3층/지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	5,800	800	200	3,800	1,000
지특회계	2,800			2,800
특별교부세
특별조정교부금
도비
시군구비	3,000	800	200	1,000	1,000
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

ㅇ 2018. 7. ~ 12. : 기본설계 및 실시설계

ㅇ 2018. 7. ~ 12. : 기본설계 완료 후 여성가족부 자문

□ 향후계획

ㅇ 2019. 1. ~ 2. : 경기도 설계심사 및 공사계약

ㅇ 2019. 3. ~ '20. 5. : 공사 착공 및 준공