개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

가평역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 이종국(☎580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미 조성으로 인해   개발이 지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를   위해 기반시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 달전리 630-9번지 일원

○ 규 모 : 도로5개소(L=1,053m), 주차장 1개소(A=5,541㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	22,500	4,800	2,900	1,250	13,550
지 방 채	3,600	1,000	-	-	2,600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,800	100	500	1,250	10,950
기 타(통합)	6,100	3,700	2,400	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016. 11. : 실시계획인가 고시

○ 2017. 1. ~ 2018. 5. : 보상추진(1-1단계 완료)

○ 2018. 8. : 문화재 정밀발굴조사용역 완료

○ 2018. 11. : 가평역세권 기반시설(도로)1-1단계 사업 착공

□ 향후계획

○ 2020. 3. : 가평역세권 기반시설(도로)1-1단계 사업 준공

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

청평역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 이종국(☎580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미 조성으로 인해   개발이 지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를   위해 기반시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 가평군 청평면 청평리 375-1번지 일원

○ 규 모 : 도로 15개소(연장 : 2,060m), 주차장 2개소(면적 : 2,950㎡),

광장 1개소(면적 : 626㎡), 공원 1개소(면적 : 1,084㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	21,700	3,700	290	2,000	15,710
지 방 채	8,100	2,000	-	-	6,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,100	200	290	2,000	9,610
기 타(통합)	1,500	1,500	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016. 11. : 실시계획인가 고시

○ 2017. 1. ~ 2018. 1. : 보상추진(1-1단계 완료)

○ 2017. 12. : 문화재 표본조사용역 완료

○ 2017. 12. : 공사 착공(1-1단계)

○ 2018. 12. : 공사 준공(1-1단계)

○ 2019.  1. : 보상추진(1-2단계: 도로, 주차장)

○ 2019.  8. : 문화재지표조사용역 완료(1-2단계: 도로)

□ 향후계획

○ 2019. 10. : 문화재시굴조사용역 완료(1-2단계: 도로)

○ 2020.  3. : 공사 착공(1-2단계: 주차장)

○ 2020. 12. : 공사 준공(1-2단계: 주차장)

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

상천역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 이종국(☎580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미 조성으로 인해   개발이 지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를   위해 기반시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 가평군 청평면 상천리 1318-5번지 일원

○ 규 모 : 도로 8개소(연장 : 2,635m), 주차장 2개소(면적 : 11,045㎡),

광장 1개소(면적 : 9,835㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	21,700	3,000	350	1,000	17,350
지 방 채	8,900	2,000	-	-	6,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,000	200	350	1,000	10,450
기 타(통합)	800	800	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2016. 11. : 실시계획인가 고시

○ 2017. 1. ~ 2018. 1. : 보상추진(1-1단계 완료)

○ 2018. 2.~5. : 문화재 정밀발굴조사용역 완료

○ 2018.  3. : 공사 착공(1-1단계)

○ 2018. 12. : 공사 준공(1-1단계)

○ 2019.  1. : 보상 추진(1-2단계:도로, 주차장)

□ 향후계획

○ 2019. 10. : 공사 착공(1-2단계: 도로)

○ 2020.  6. : 공사 준공(1-2단계: 도로)

개별 지방채 발행사업 추진현황 (작성서식 예시)

사업명

지방교부세 감액 보전

담당자

세정과박순분(☎580-2020)

□ 사업목적 및 필요성

○지방교부세 감액보전을 위해 2009년 발행된 지방채(60억)에 대한 이율이

공공자금관리기금(기획재정부) 4.85%로 금리가 높아 2013.9월 안전행정부와

기획재정부가 협의하여 2013. 12. 13 군금고인 NH농협은행(3.77%, 3년 변동

금리)으로 변경 차환

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 3 ~ 2024. 9(5년 거치 10년상환)

○ 위 치 :

○ 규 모 :

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :        6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,000	1,800	600	1,509	2,091
지 방 채	6,000	1,800	600	1,509	2,091
국 비
시 도 비
시군구비
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○2019. 3. 12. 상환 완료

○2019. 4. 30. 조기상환(1,000백만원)

□ 향후계획

○ 2019. 9. 9 ~ 2024. 9. 9까지 상환예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2019. 4. 30. 조기상환(1,000백만원)

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

뮤직빌리지 조성사업

담당자

관광과 은지혜(☎580-4633)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재즈축제, 자라섬, 남이섬 등 우수한 관광자원과 연계한 문화기반 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화 도모

※ ’14. 12. 29. 넥스트경기 창조오디션 대상(굿모상) 수상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 10.

○ 위 치 : 가평읍 대곡리 148-3번지 일원

○ 규 모 : A=37,257㎡, 건물 6개동 신축(연면적 5,166㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,694백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	40,694	32,679	8,015	-	-
지 방 채	8,000	8,000	-	-	-
국 비	500	500	-	-	-
시 도 비	11,870	10,000	1,870	-	-
시군구비	17,777	12,632	5,145	-	-
기 타(통합)	2,547	1,547	1,000	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 04. ~ 2016. 12. 도시개발사업 구역지정 및 실시설계용역 추진

○ 2017. 01. 공사 착공

○ 2018. 03. 민간위탁 운영자 협약 체결

○ 2018. 10. 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음