북면행정복지센터 신축

회계과, 이종관, 580-2932

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

가평군 북면 목동리 9134번지 외 3필지

○ 인구 수

착공일

준공일

4,057명(2017. 10월 기준)

4,041 명(2019. 4월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

16명 / 16명

18 명 / 18 명

○ 재정자립도

착공일

준공일

25.29%

18.3%

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
행정복지센터	1989	3,121		522.5	지상3층

○ 청사신축 필요성

건축물 노후, 공간 협소

○ 사업기간

착공 당시

2017.10 ~ 2018.10 (1년)

준공

2017.10 ~ 2019. 4. (1.5년)

○ 사업수행방식

입찰

○ 추정(예정)가격

5,525백만원

계약금액

5,031백만원

낙찰율

87.1%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
본청/의회/기타	2019	4,868		2,463.11	지하1/지상3

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	5,795			5,795
Y-3 이전
Y-2	370			370
Y-1	5,425			5,425
준공연도(Y)

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

Y-3 이전

Y-2

Y-1

준공연도(Y)

1) 토지매입비

2) 설계비

150

3) 감리비

120

4) 공사비

5,525

5) 기타부대비

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

‘16.11

반영

자체

타당성 조사

해당없음

-

자체

투자심사

‘17. 2

적정

중앙

공유재산관리계획

‘16. 9

승인

지방의회

설계

‘17. 1

자체

착공

‘17.10

자체

준공

‘19. 4

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		금액·비율	사업공사비	비고
합계	금액	5,524,815,000
	원/㎡	2,243,124
	점유율	100%
건 축	금액	3,724,803,000
	원/㎡	1,512,235
	점유율	41.5%
기 계 (소방포함)	금액	368,445,000
	원/㎡	149,585
	점유율	32.59%
전 기	금액	779,523,000
	원/㎡	316,493
	점유율	14.11%
통 신	금액	312,294,000
	원/㎡	126,794
	점유율	5.65%
부대시설 (토목,조경)	금액	339,750,000
	원/㎡	137,942
	점유율	6.15%