개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

공영주차장 확보(가평읍)

담당자

교통과 교통지도팀장 김중열

(031-580-2074)

□ 사업목적 및 필요성

○ 읍면 시가지(도심, 주택가 등) 내의 부족한 주차공간 확보를 통하여 원활한        교통 소통과 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020

○ 위 치 : 가평군 가평읍 읍내리 461-7

○ 규 모 : 부지면적 818㎡, 주차면수 70대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,555백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	1,555	1,255		300	0
특별교부세
특별조정교부금
도비
시군구비	1,555	1,255		300
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

ㅇ 2018. 10. : 공영주차장 확보 변경계획 수립(공약사업)

ㅇ 2019. 2. : 가평읍 공영주차장 토지 감정평가 의뢰

ㅇ 2019. 4. : 가평읍 공영주차장 대상 토지 매입완료(군비 1,255백만원)

ㅇ 2020. 2~3. : 가평읍 공영주차장 조성공사 실시설계용역 착수 및 문제점보고

ㅇ 2020. 4. : 가평군 공영주차장 조성공사 실시설계용역 설계변경

ㅇ 2020. 6. : 가평군 공유재산심의회 심의 의결

□ 향후계획

ㅇ 2020. 8. ~ 2020. 12. : 가평읍 공영주차장 조성 공사 착공 및 준공

사업명

보납도시자연공원 조성

담당자

도시과 전종한(☎580-2351)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보납도시자연공원은 송전탑이 설치된 이후로 경관이 훼손되었을 뿐 아니라, 송전탑은 자라목에서 달전리 신역사 부근을 지나 청평면쪽으로 뻗어가나고 있어 가평 지역발전에 걸림돌이 되어 송전탑 이전사업을 통한 주민숙원 사항 해소하고 지역관광거점으로써의 역할 수행 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12..

○ 위 치 : 가평군 가평읍 읍내리 산 94-1번지 일원

○ 규 모 : 도시자연공원 조성: 156,800㎡, 송전철탑(2기) 이설(H=100m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	35,700	0	0	500	35,200
특별교부세	0
특별조정교부금	0
도비	0
시군구비	2,000			500	1,500
지 방 채	10,000				10,000
기 타	23,700				23,700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

ㅇ 1971. 06. 03: 보납도시자연공원 결정

ㅇ 2015. 08. 21: 공원조성계획 결정

ㅇ 2019. 09.: 가평군 중기지방재정계획 반영

ㅇ 2019. 11.: 지방재정 투자심사(중앙심사, 행정안전부) 조건부 승인

ㅇ 2019. 12.: 2019년 제3회 추경예산 반영(500백만원)

ㅇ 2020.  6. 24: 실시계획인가

□ 향후계획

ㅇ 2020. 09.: 경기 First 정책공모사업 심사

ㅇ 2020. 10.: 지방재정 투자심사 변경심사 추진

ㅇ 2021. 01.: 지방채 발행(10,000백만원)

ㅇ 2021. 01. ~ 09.: 보상 협의

ㅇ 2021. 03.: 문화재 발굴조사 착수(문화체육과)

ㅇ 2022.  1.: 공원조성계획 변경, 실시계획 변경인가 및 착공

ㅇ 2023. 12.: 공사완료 공고

사업명

공영주차장 확보(설악면)

담당자

교통과 교통지도팀장 김중열

(031-580-2074)

□ 사업목적 및 필요성

○ 읍면 시가지(도심, 주택가 등) 내의 부족한 주차공간 확보를 통하여 원활한        교통 소통과 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2021

○ 위 치 : 가평군 설악면 신천리 155-15 일원

○ 규 모 : 부지면적 3,477㎡, 주차면수 110대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,843백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액	향후 소요액
		기투자 (2020년)	2020년	2020년 이후
계	2,843	2,143	200	500
특별교부세
특별조정교부금
도비	2,400	1,975		425
시군구비	443	168	200	75
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

ㅇ 2018. 10. : 공영주차장 확보 변경계획 수립(공약사업)

ㅇ 2019. 3. : 2025 군 관리계획(변경) 결정 사업계획 제출

ㅇ 2020. 1. : 설악면 공영주차장 부지 감정평가 의뢰

ㅇ 2020. 3. : 설악면 공영주차장 부지매입(도비 1,975 군비 168백만원)

□ 향후계획

ㅇ 2020. 8. ~ 2020. 12. : 2025 가평 군관리계획 재정비(주차장) 고시 이후                                 잔여필지 토지 수용 추진

사업명

가평군 평생학습관 건립

담당자

평생교육사업소 김범수(☎580-4678)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고등교육기관이 전무한 가평군의 주민들이 인근 도시로의 시간·경제적        비용 소비

○ 기업·공공 일자리 사업등과 연계한 지역특성 직업능력개발로 청년층 인구       유출 방지 및 고령층 인적자원개발을 통한 지역성장 극대화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. ~ 2023. 3.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 읍내리 885번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 7,450㎡, 연면적 6,610㎡(지상4층/지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	18,000	-	-	1,550	16,450
도비	15,300	-	-		15,300
군비	2,700	-	-	1,550	1,150

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

ㅇ 2019. 12.: 공유재산관리계획 승인, 중기지방재정계획 반영

ㅇ 2020. 1~2.: 설계내역 산출 및 설계공모 지침서 수립

ㅇ 2020. 3.: 건축설계공모 심사위원 선정

ㅇ 2020. 4.: 경기도 계약심사 의뢰

ㅇ 2020. 4~5.: 국가공공건축지원센터 사전검토 완료

ㅇ 2020. 6.: 군관리계획(시설) 결정 용역, 재해영향성 검토용역 실시

ㅇ 2020. 7.: 지방건축위원회(공공건축심의위원회 대체) 심의 완료(건축과)

□ 향후계획

ㅇ 2020. 8. ~ 10. : 건축설계공모 시행

ㅇ 2020. 8. ~ 2021. 6. : 토지 협의매수 및 수용

ㅇ 2020. 11. ~ 2021. 6. : 기본 및 실시설계 용역 실행

ㅇ 2021. 7. ~ 2023. 2. : 공사 착공 및 준공

ㅇ 2023. 3. : 평생학습관 개관

사업명

학교체육관 건립 협력 지원

담당자

평생교육사업소 김학선(☎580-2471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미세먼지로부터 안전한 학생들의 실내 활동 공간 확보

○ 4계절 체육활동 및 수업평등권 보장

○ 지역주민과 함께 활용할 수 있는 문화·체육·여가 공간 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 가평군 청평면 경춘로 75, 대성초등학교

○ 규 모 : 부지면적 6,747㎡, 연면적 700㎡(지상1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	2,550	580		1,970
특별교부세
특별조정교부금
도비	295			295
시군구비	295			295
지 방 채
기 타	1,960	580		1,380

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 9. : 220년 체육관 건립지원 사업 대상교 확정

○ 2019. 10. : 경기도교육청 제2차추경 예산배정(설계비 1억원)

○ 2019. 10. ~2020. 7.: 설계용역 진행

○ 2020. 6. : 가평군 교육경비보조금 예산 집행(295백만원 전액 교부)

□ 향후계획

○ 2020. 8. ~ 2021. 7.: 공사착공 및 준공

○ 2021. 9. ~  : 보조금 정산 및 검사

사업명

가평군 가평문화원 건립

담당자

문화체육과 김지영(☎580-2061)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가평군의 문화를 대표하는 (사)가평문화원의 독립원사를 건립하여 가평       군민의 문화에 대한 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 6. ~ 2021 8.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 대곡리 350번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 2,324㎡, 연면적 2,496.76㎡(지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	7,800	220	2,891	3,493	1,196
특별교부세
특별조정교부금	2,000		2,000
도비	2,229			1,033	1,196
시군구비	2,680	220		2,460
지 방 채
기타(균특)	891		891

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2018. 3. 28 : 지방재정 투자 심사

○ 2018. 4. 13 : 지방문화원 시설비 지원사업 사전평가

○ 2018. 4. 27 : 기본 및 실시설계용역발주

○ 2019. 8. : 경기도 계약심사 완료

○ 2019. 8. : 문화체육관광부 사업변경승인(사업규모, 사업기간, 사업비 변경)

- 면적 453.42㎡, 사업기간 6개월, 사업비 2,770백만원(국 1,196, 지 1,574) 각각 증가

○ 2019. 9. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2019. 10. : 공사 착공

○ 2019. 11. : 지방재정 투자 재심사(경기도) 완료

□ 향후계획

○ 2021. 4. : 공사 준공

○ 2021. 7. : 시운전 및 임시운영

○ 2021. 8. : 개관

사업명

조종 반다비 문화체육센터 건립

담당자

문화체육과 박제진(☎580-2072)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인과 비장애인이 함께 이용하여 지역주민의 화합과 취약계층의 복지향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 6. ~ 2023. 6.

○ 위 치 : 가평군 조종면 현리 420-10번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 7,500㎡, 연면적 1,500㎡(지상3층/지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	7,800	800	1.000	3,000	3,000
특별교부세
특별조정교부금
도비
시군구비		800		2,000	2,000
지 방 채
기 타			1,000	1,000	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

ㅇ 2019. 6. : 2019 생활체육시설 확중 지원사업 공모 선정

ㅇ 2019. 11. : 경기도 투자심사 완료

ㅇ 2019. 12. : 공유재산 관리계획 승인

□ 향후계획

ㅇ 2020. 10.~11. : 실시설계용역 착수, 토지보상 실시

ㅇ 2021. 7. : 계약심사, 건축·인허가 등 행정절차완료

ㅇ 2021. 8. : 실시설계용역 준공

ㅇ 2021. 9. ~ 2023. 6. : 공사착공 및 준공

사업명

가평종합운동장 스탠드 및 체육시설 개선공사

담당자

문화체육과 조영윤(☎580-2504)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기도체육대회 및 경기도 생활체육대축전 등 도단위 체육행사 유치를 통한 체육도시 이미지 제고 및 체육시설 인프라를 구축하고, 기존 스탠드 관람석 및 종합운동장 운영공간을 확충하여 이용자의 편의를 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 6. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 대곡리 316번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 62,903㎡, 스탠드 및 관람석 설치, 보조 육상트랙 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	7,990	370.0	220	7,400
특별교부세
특별조정교부금
도비
시군구비	5,740	370	220	5,150
지 방 채
기 타	2,250(지특회계)			2,250(지특회계)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

ㅇ 2018. 05.~08. : 공유재산관리계획 승인

ㅇ 2018. 05. : 스탠드 실시설계용역 착수

ㅇ 2018. 12. : 체육시설 개선 실시설계용역 착수

ㅇ 2019. 09. : 스탠드 설치공사 실시설계용역 준공

ㅇ 2019. 12. : 스탠드 설치공사 착공

□ 향후계획

ㅇ 2020. 08. : 체육시설 개선 실시설계용역 준공

ㅇ 2019. 12. ~ 2020. 12. : 공사착공 및 준공

사업명

설악면 행정복지센터 건립사업

담당자

회계과 이종관(☎580-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청사건물 노후에 따른 주민들의 안전 및 면적협소로 인한 행정수행의 어려움이 있어 청서신축으로 행정편의 및 주민편익 시설 확장.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 4.

○ 위 치 : 가평군 설악면 신천리 156-1

○ 규 모 : 부지면적 7,070㎡, 연면적 2,800㎡(지상3층/지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	9,500	3,000	300	5,700	500
특별교부세
특별조정교부금
도비
시군구비	9,500	3,000	300	5,700	500
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

ㅇ 중기지방재정계획 반영 : 2018. 12월

ㅇ 주민의견수렴 간담회 개최 및 공유재산관리계획 승인 : 2019. 3월

ㅇ 경기도 투자심사 승인(조건부-사전정밀안전진단 이행) : 2019. 8월

ㅇ 정밀안전진단 용역 준공 : 2019. 11월

ㅇ 공공건축 사업계획 사전검토 신청(공공건축지원센터) 및 회신 : 2020. 7월

□ 향후계획

ㅇ 가평군 건축위원회 심의 : 2020. 8월 ~ 2020. 8월

ㅇ 설계 공모(제안공모) 조달청 의뢰 : 2020. 9월 ~ 2020. 10월

ㅇ 기본 및 실시설계 용역 : 2020. 10월 ~ 2021. 3월

ㅇ 공사 착공 및 준공 : 2021. 3월 ~ 2022. 3월

사업명

7080 청평고을 조성사업

담당자

관광과 김경태(☎580-2516)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청평의 낙후지역에 대한 개선과 실현가능한 지역발전 및 지역경제 활성화를 통한 상권 자생력 확보, 일자리 창출 등을 목표로함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 8. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 가평군 청평면 청평리 구청평역사 일원

○ 규 모 : 부지면적 1,349㎡, 연면적 2,043.24㎡(지상3층/지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	26,300	6,325	3,100	8,175
특별교부세	800	800
특별조정교부금	7,900	7,900
도비
시군구비	17,600	6,325	3,100	8,175
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

ㅇ 2017. 4.~2018. 6. : 청평고을 마스터플랜 수립

ㅇ 2018. 8.~2020. 3. : 청평역세권 지구단위 계획 변경

ㅇ 2019. 4.~ 현재: 기본 및 실시설계용역

□ 향후계획

ㅇ 2020. 9. ~ 2021. 12. : 공사착공 및 준공