개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

자라섬 수변생태관광벨트 조성사업

담당자

관광과 자라섬팀 김양섭

(☎580-4632)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 자라섬 자연생태관광자원을 토대로 수변생태관광 거점 및 관광ㆍ레저 인프라를 구축하여 브랜드 가치를 향상시키고 나아가 가평군민 및 전국민에게 힐링(Healing) 공간을 제공하여 지역경제 활성화 도모.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 가평읍 자라섬로 60 자라섬 일원

○ 규 모 : 자라섬 수변생태관광벨트 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,000	0	573	5,027	10,400
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	4,250	-	-	-	4,250
시군구비	3,750	-	-		3,750
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	8,000	-	573	5,027	2,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5% )

○ 2020. 03. : 지방재정 투융자 심사 승인

○ 2020. 07. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2020. 10. : 소규모환경영향평가 용역 착수

○ 2020. 11. ~ 현재까지 : 관계기관 인ㆍ허가(하천점용허가, 환경영향평가 등) 협의 추진

□ 향후계획

○ 2021. 09. : 관계기관 인ㆍ허가(하천점용허가, 환경영향평가 등) 협의 완료(예정)

○ 2021. 09. : 기본 및 실시설계용역 완료(예정)

○ 2021. 10. : 공사 착공(예정)

○ 2024. 12. : 공사 준공(예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

설악면 행정복지센터 건립사업

담당자

회계과이종관(☎580-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청사건물 노후에 따른 주민들의 안전 및 면적협소로 인한 행정수행의 어려움이 있어 청사신축으로 행정편의 및 주민편익 시설 확장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2121.

○ 위 치 : 가평군 설악면 신천리 156-1외 2필지

○ 규 모 : 연면적 2,800㎡. 지하1층/지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	6,500			250	6,250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 중기지방재정계획 반영: 2018. 12.

○ 주민의견수렴 간담회 개최 및 공유재산관리계획 승인: 2019. 3.

○ 경기도 투자심사 승인(조건부-사전정밀안전진단 이행): 2019. 8.

○ 정밀안전진단 용역 준공: 2019. 11.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 신청(공공건축지원센터): 2020. 6.

○ 공공건축 건축설계공모 가평군건축위원회 심의완료: 2020. 9.

○ 조달청 설계공모(제안공모) 계약 의뢰: 2020. 10.

○ 민·관 협의체 회의 및 주민설명회 개최 : 2021. 2. / 2021. 4.

○ 기본 및 실시설계 진행중: 2021. 6.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역: 2021. 1. ~ 2021. 8.

○ 공사 착공 및 준공: 2021. 9. ~ 2022. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

조종청소년 문화의집 및 작은 영화관 건립

담당자

평생교육사업소 김미경

(☎580-2465)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년 전용 문화활동 공간 및 프로그램 제공으로 지역 청소년 문화복지 및 청소년 보호

○ 지역주민을 위한 문화 향유 공간 건립으로 도·농 간 문화 소외현상 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2. ~ 2021. 10.

○ 위 치 : 가평군 조종면 현리 410-6번지 외 6필지

○ 규 모 : 부지 3,623㎡, 연면적 1,850㎡(지하 1층 ~ 지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,924백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,924	1,553	1,325	6,046
국 비	2,700		985	1,715
시 도 비	756		18	738
시군구비	3,468	1,553	182	1,733
지 방 채
민간자본
기 타 (특별조정교부금)	2,000		140	1,860

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  75%)

○ 2018.  2.: 청소년문화의집 건립 기본계획 수립

○ 2018.  7.: 경기도 투자심사

○ 2019.  5.: 기본 및 실시설계 계약의뢰 및 계약(조달청)

○ 2019. 11.: 사업계획 변경(여가부 승인)

○ 2020.  5.: 경기도 투자심사(재심의) 및 계약심사

○ 2020.  6.: 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2020.  7.: 공사 및 용역(감리) 계약, 착공

□ 향후계획

○ 2021. 10. 공사 준공(예정)

□ 사업변경 내역

○ 2019. 11. : 사업계획 변경(여가부 승인)

- 지하주차장 설치 불가로 부지확대(당초 2,190㎡ → 변경 3,623㎡)

- 연면적 축소(당초 2,200㎡ → 변경 1,850㎡)

○ 2020. 5.: 경기도 투자심사(재심의) 및 계약심사(당초 58억 → 변경 89억)

- 부지면적 확대에 따른 토지 매입비 증가(당초 8억 → 변경 15억)

- 2020년 실시설계에 따른 2016년 대비 공사비 증가(당초 50억 → 변경 75억)

○ 2021. 2.: 사업기간 연장(집중호우 및 소방시설추가 설치)

- 당초 2020. 7. 7. ~ 2021. 8. 30.

변경 2020. 7. 7. ~ 2021. 10. 22.

사업명

북면생활체육공원 조성사업

담당자

문화체육과 이근용(☎031-580-2503)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육시설의 도입으로 각종 동호회 활동을 통한 주민들의 건강증진에 기여하고 지역대회 개최를 통한 지역간 교류확대 및 지역경제의 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 01월 ~ 2021년 12월

○ 위 치 : 경기도 가평군 북면 목동리 931번지 일원

○ 규 모 : 35,173㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,440	5,374	437	5,629
국 비	1,500		117	1,383
시 도 비	9,940	5,374	320	4,246
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 2020. 06. : 문화재 정밀발굴조사 완료

○ 2020. 12. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021년 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

자라섬 재즈페스티벌

담당자

문화체육과 황승현(☎580-4322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가평을 대표하는 문화예술축제가 부재하기 때문에 지역을 대표하는 문화예술축제를 지원함으로써 지역 및 문화 및 관광 인프라를 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 10. 중 3주간

○ 위 치 : 자라섬, 가평 주요 거점 등

○ 규 모 : 실내외 온라인 재즈공연

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	200		200	0	0
지 방 채
민간자본
기 타	0			0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 현재 보조금 교부 전

○ 축제 기획 진행 중

□ 향후계획

○ 코로나19 관련 방역지침에 입각한 행사 기획

○ 전체 예산규모 축소 및 수익금의 공익적 활용

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 코로나19로 인한 온라인 진행

사업명

북면 도대리 생태하천 조성사업

담당자

관광과 관광개발팀 이훈희

(031-580-2517)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가평천 불법시설 정비 이후 주소득원의 상실로 인한 지역의 위기를 경기도 생태관광 1번지 탄생의 기회로 바꾸기 위한 기초 편의시설 생활SOC구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2021

○ 위 치 : 북면 도대리 569번지 , 623번지 일원

○ 규 모 : 용소폭포 친수공간 조성 1식, 명지산 주차장 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2020년 이후
계	2,500	0	1,310	1,190	0
특별교부세	-	-	-	-	-
특별조정교부금	1,250	-	655	595	-
도비	-	-	-	-	-
시군구비	1,250	-	655	595	-
지 방 채	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

ㅇ 2020. 2. : 실시설계용역 발주

ㅇ 2020. 6. : 용소폭포 친수공간 조성 발주

ㅇ 2020. 12. : 용소폭포 친수공간 조성 준공

□ 향후계획

ㅇ 2021. 8. ~ 2020. 12. : 명지산 주차장 공사 착공 및 준공

사업명

읍내8리 사방사업 및 토지매입사업

담당자

산림 김지성(☎580-2383)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민가 인근 사면 낙석발생으로 주민이주 및 사방공사를 통한 주민의 생명       과 재산 보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.1.1.~2021.12.31

○ 위 치 : 가평군 가평읍 읍내리 292-48번지 일원

○ 규 모 : 사방사업 1식, 토지 및 건물매수·철거(8가구)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,686백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비			2,686
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사방사업 완료

○ 주민이주 및 건물매입·철거 완료(8가구)

□ 향후계획

○ 사방사업 후 유휴토지에 주민 쉼터(공원) 조성

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

북면 제령리 친수공간 조성사업

담당자

관광과 관광개발팀 김경태

(031-580-2516)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가평천 불법시설 정비 이후 주소득원의 상실로 인한 지역의 위기를 경기도 생태관광 1번지 탄생의 기회로 바꾸기 위한 기초 편의시설 생활SOC구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2021

○ 위 치 : 북면 목동리 ~ 백둔리 일원

○ 규 모 : 수변데크 6km, 친수공간 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2020년 이후
계	4,900	0	60	4,840	0
특별교부세	0	-	-	-	-
특별조정교부금	2,450	-	60	2,390	-
도비	0	-	-	-	-
시군구비	2,450	-	-	2,450	-
지 방 채	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

ㅇ 2020. 2. : 실시설계용역 발주

ㅇ 2021. 7. : 제령리 친수공간 조성사업 착공

□ 향후계획

ㅇ 2021. 7. ~ 2020. 12. : 공사 준공

사업명

가평군 어비계곡 관광자원화사업 조성공사

담당자

건설과 민 홍(☎580-2161)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가평군 설악면 가일리 어비계곡은 성수기 주차장 및 수미터 부족과 만성적인 교통체증으로 인하여 방문객의 불편을 초래하고 있는 실정으로 금회 주차장 및 쉼터공간을 확보하여 방문객의 불편을 해소하고 지역경제 활성화를 기어코자 하며

○ 경기도에서 추진한 하천·계곡 불법 원상복구에 따라 가일리 어비계곡은 하천불법 46개소를 적발하고 주거용시설 1개소를 제외한 45개소를 원상복구함에 따라 침체되어 있는 지역상권을 되살리고자 방문객 편익시설 및 어비산 등산로와 연계된 틈새공원 설치 등 관광자원화 사업을 시행하고자함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4 ~ 2021. 6.

○ 위 치 : 가평군 설악면 가일리 350번지 일원

○ 규 모 : 주차장(72면), 수변 데크로드 조성, 소공원 2개소, 이동식 화장실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,608백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,608		694	914
국 비
시 도 비	1,804	1,000	347	457
시군구비	1,804	1,000	347	457
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 생활SOC 공모사업 심사계획수립(경기도): 2020. 01. 06.

○ 생활SOC 공모사업 현장방문: 2020. 01. 15.

○ 생활SOC 공모사업 심사위원회 개최: 2020. 01. 31.

○ 생활SOC 공모사업 확정(경기도): 2020. 02. 04.

○ 어비계곡 관광자원화사업 조성공사 실시설계용역 준공: 2020. 06. 22.

○ 어비계곡 관광자원화사업 조성공사(주차장) 준공: 2020. 12. 23.

○ 어비계곡 관광자원화사업 조성공사 준공: 2021. 06. 15.

□ 향후계획

○ 어비계곡 관광자원화사업 조성공사(전기) 준공예정: 2021. 07월 중

□ 사업변경 내역(해당시)

○  해당없음

사업명

조종면 운악리 조종천 친수공간 조성공사

담당자

건설과 윤영웅(☎588-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청정계곡 만들기 일환으로 불법 시설물들을 철거하고 지역상권을 살리고자 하는 사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 10. 7 ~ 2021. 7. 31.

○ 위 치 : 조종면 운악리 일원(운악산 입구 앞 하천)

○ 규 모 : 친수공간 조성 L=560m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,922백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,922
국 비
시 도 비	1,461	1,000	133	328
시군구비	1,461	1,000	133	328
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 생활SOC 공모사업 심사계획수립(경기도): 2020. 01. 06.

○ 생활SOC 공모사업 현장방문: 2020. 01. 15.

○ 생활SOC 공모사업 심사위원회 개최: 2020. 01. 31.

○ 생활SOC 공모사업 확정(경기도): 2020. 02. 04.

○ 운악리 조종천 친수공간 조성 실시설계용역 준공: 2020. 06. 22.

○ 운악리 조종천 친수공간 조성(벽화조성사업 용역) 준공: 2020. 07. 16.

○ 운악리 조종천 친수공간 조성(산책길 조성) 착수: 2020. 10. 07.

○ 운악리 조종천 친수공간 조성(경관조명) 착수: 2020. 12. 08.

□ 향후계획

○ 운악리 조종천 친수공간 조성사업 준공: 2021. 7. 31.

○ 준공 후 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항없음