사업명

가평역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 이종국(☎580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미조성으로 인해 개발이       지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를 위해 기반       시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 달전리 445-11번지 일원

○ 규 모 : 도로 5개소(L=1,053m), 주차장 1개소(A=5,541㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	22,500	8,950	2,300	4,600	6,650
지 방 채	3,600	1,000			2,600
국 비
시 도 비
시군구비	12,800	1,850	2,300	4,600	4,050
기 타	6,100	6,100

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016. 11. : 실시계획인가 고시

○ 2017. 1.~ : 보상추진

○ 2018. 11. : 공사 착공(도로 3개소)

○ 2020.  9. : 공사 준공(도로 3개소)

○ 2021. 1.~ : 보상추진

□ 향후계획

○ 2022.  1. : 공사 착공(도로3개소)

○ 2022. 12. : 공사 준공(도로3개소)

사업명

청평역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 이종국(☎580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미조성으로 인해 개발이       지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를 위해 기반       시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 가평군 청평면 청평리 375-1번지 일원

○ 규 모 : 도로 15개소(연장 : 2,060m), 주차장 2개소(면적 : 2,950㎡),

광장 1개소(면적 : 626㎡), 공원 1개소(면적 : 1,084㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	21,700	7,390	3,600	1,400	9,310
지 방 채	8,100	2,000			6,100
국 비
시 도 비
시군구비	12,100	3,890	3,600	1,400	3,210
기 타	1,500	1,500

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016. 11. : 실시계획인가 고시

○ 2018. 12. : 공사완료(도로 4개소)

○ 2019. 12. : 공사완료(도로 1개소)

○ 2021.  5. : 공사완료(주차장 1개소)

○ 2021.  6. : 공사착공(도로 1개소)

□ 향후계획

○ 2022.  3. : 공사완료(도로 1개소)

사업명

상천역세권 기반시설 조성사업

담당자

도시과 이종국(☎580-2461)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 지역은 가평의 지역 관문이나 기반시설의 미조성으로 인해 개발이       지연되고 있어 낙후된 이미지의 탈피 및 지역개발 활성화를 위해 기반       시설의 조속한 개설이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 가평군 청평면 상천리 1722-5번지 일원

○ 규 모 : 도로 8개소(연장 : 2,635m), 주차장 2개소(면적 : 11,045㎡),

광장 1개소(면적 : 9,835㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	21,700	5,450	900	200	15,150
지 방 채	8,900	2,000			6,900
국 비
시 도 비
시군구비	12,000	2,650	900	200	8,250
기 타	800	800

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016. 11. : 실시계획인가 고시

○ 2018. 12. : 공사완료(도로 3개소)

○ 2020. 10. : 공사완료(도로 2개소)

○ 2021.  6. : 공사완료(주차장 1개소 및 도로 1개소)