개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

가평 거리축제

담당자

문화체육과 황승현(☎580-4322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활문화형 지역축제로 지역민 화합과 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 9. ~ 10. 중

○ 위 치 : 가평읍내 일원

○ 규 모 : 야외공연 및 거리축제

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 350백만원(군비 320, 도비 30)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계			50	50	400
국 비
시 도 비			6
시군구비			44	50	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 코로나로 인해 본 축제는 취소 되었으나 일부 사전행사를 진행함(음악역        1939에서 주민참여형 공연인 시티즌 공연으로 진행)

□ 향후계획

○ 2023년 본 예산 반영 및 제1회 행사 추진 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

제18회 자라섬 재즈페스티벌

담당자

문화체육과 황승현(☎580-4322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국을 대표하는 축제도시로서의 지역 브랜드 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 11. 5. ~ 7.

○ 위 치 : 자라섬 및 음악역1939 뮤직홀

○ 규 모 : 대규모 야외 재즈공연

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 600백만원(군비 400, 자부담 200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계			600	1,000	1,000
국 비
시 도 비
시군구비			400	400	400
지 방 채
민간자본			200	600	600
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 코로나 상황 중에서 2021년 문화체육관광부의 승인을 받아 하루 2,000명의       관객 제한을 두고 진행함

□ 향후계획

○ 2022년 10월 중 3일간 정상 개최 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

음악역1939 공연프로그램운영

담당자

문화체육과 강필수(☎580-4321)

□ 사업목적 및 필요성

○ 토요일 저녁 정례적인 공연 프로그램 운영을 통한 음악역1939의 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4. ~ 8.

○ 위 치 : 음악역1939 일원

○ 규 모 : 실내외 공연 프로그램 18회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 300백만원(군비 300)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계			300	600	600
국 비
시 도 비
시군구비			300	600	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 2021년 18회 공연 추진 완료

□ 향후계획

○ 2022년 상반기 총 20회 진행 중이며, 하반기는 야외 대형 공연 2회와 실       내 10회로 편성하여 진행 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가평군 직원 관사 신축공사

담당자

회계과 이원일(☎580-2944)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 신규 임용자가 늘어나 공급호실이 부족한 실정인데도 현재 시설 노후화로

인해 신규 직원이 입주를 꺼리고 있어 상시 공실이 3실 이상으로 개선이 필요함

독신관사의 경우 1983년도에 신축되어 30년 이상 경과되었고 벽체 균열,

방수층 파괴 등 건물 노후화로 사용에 어려움이 있어 매년 유지보수를

위한 사업비 지속 소요 및 내진설계 비적용으로 지진에 취약하여 관사

신축이 시급함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년  1월 ～ 2022년  10월

○ 위 치 : 가평군 가평읍 읍내리 564-2

○ 규 모 : 연면적 573.5㎡ / 지상 5층 / 20세대 / 철근콘크리트 구조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,716백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,716	223	1,878	615	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,716	223	1,878	615	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 지상 5층 타설 완료

□ 향후계획

○ ‘22. 06. 30. : 골조 공사 완료

○ ‘22. 09. 05. : 외·내부 마감 공사 완료

○ ‘22. 10. 06. : 준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

농어촌도로 설206호선 도로 확포장공사

담당자

건설과 이병철(☎580-2432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 도로 폭의 협소와 선형이 불량한 농어촌도로에 대한 확포장으로 차량의 안전사고를 사전에 방지하고 주민들이 안전하고 편안하게 이동할 수 있도록 도로 환경을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 01. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 설악면 창의리 177-5번지 일원(창의리 마을회관~엄소리 무당소교)

○ 규 모 : 농어촌도로 확장 L=2.56km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,000	690	85	1,000	11,310
국 비
시 도 비
시군구비	13,000	690	85	1,000	11,310
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2022. 6. : 보완설계 진행 중

□ 향후계획

○ 2022. 8. : 보완설계 완료 및 보상협의 진행(예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가평도시계획도로 중로1-23호선 개설공사

담당자

도시과 정종경(☎580-2372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가평도시지역 내 개발여건이 점차적으로 증가함에 따라 효율적인 교통체계 구축을 위한 도시계획도로 확장이 필요한 실정

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 가평군 가평읍 대곡리 318-1번지 일원(한석봉체육관~코아루아파트)

○ 규 모 : 도로확장 L=689m, B=12m→20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	8,000	100		1,500	6,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 01. : 실시설계용역 착수

○ 2020. 11. : 실시설계용역 완료

○ 2022. 06. : 보상계획 공고

□ 향후계획

○ 2023. 03. : 편입토지 및 지장물 보상완료

○ 2023. 04. : 공사착공

○ 2024. 12. : 공사준공

사업명

군도8호선 도로 확포장공사

담당자

건설과 이현석(☎580-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존도로의 폭이 협소하고 선형이 불량하여 불편을 겪고 있는 주민들을 위해 안전하고 편안하게 이동할 수 있는 도로 환경을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 01. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 청평면 상천리 643-4번지 일원(수리재 입구~상천3리 마을회관)

○ 규 모 : 군도 확장 L=2.8km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,963백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,963	10,963	982	4,000	-
국 비
시 도 비
시군구비	14,963	10,963	982	4,000	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2022. 5. : 2단계 구간 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 12. : 공사 준공 및 도로개통(예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

농어촌도로 조종101호선 도로 확포장공사

담당자

건설과 이병철(☎580-2432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 도로 폭의 협소와 선형이 불량한 농어촌도로에 대하여 차량의 안전사고를 사전에 방지하고 주민들이 안전하고 편안하게 이동할 수 있도록 도로 환경을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 01. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 조종면 대보리 338-2 일원(대보1리 마을회관~마일2리 마을회관)

○ 규 모 : 농어촌도로 확장 L=2.4km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,000	5,300	961	3,100	11,310
국 비
시 도 비
시군구비	9,000	5,300	961	3,100	11,310
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2021. 6. : 2단계 구간 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 공사 준공 및 도로개통(예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가평군 장애인재활(체육)지원센터 건립

담당자

행복돌봄과

오경아(☎580-2225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인복지 허브공간 마련을 통한 다양한 복지욕구 충족 및 장애인 특성에 맞는 재활 및 체육활동 지원을 통한 자립역량 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014~2022

○ 위 치 : 가평군 가평읍 읍내리 860번지 외 2필지

○ 규 모 : 건축연면적 1,475.70㎡, 지상3층(바닥면적 601.18㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,931백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,931	863	1,062	5,006	-
특별교부세	1,000	-	398	602	-
특별조정교부금	3,000	-	-	3,000	-
시군구비	2,931	863	664	1,404	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

○ 2014. 5~6. 건립계획 수립 및 부지매입(읍내리 860번지)

○ 2019. 7. 건립계획(수정) 수립

○ 2019. 9~10. 공유재산관리계획 및 지방재정투자심사 승인

○ 2021. 1. 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 6. 특별교부세 1,000백만원 확보

○ 2021. 10~12. 계약심사 및 일상감사, 실시설계용역 완료

○ 2021. 10. 건립계획 변경 수립(당초 사업비의 30% 초과 변경)

○ 2021. 12. 공유재산관리계획(변경)안 및 지방재정투자심사(재심사) 승인

○ 2021. 12. 특별조정교부금 3,000백만원 확보

○ 2021. 12. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. 공사준공

○ 2023. 1. 시설 운영

사업명

대곡지구 군계획시설 중로2-5호선 개설공사

담당자

도시과 윤경업(☎580-2358)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기반시설 확충을 통한 대곡지구 지구단위계획 내 발전의 기틀 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 5. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 경기도 가평군 가평읍 대곡리 202-7번지 일원

○ 규 모 : 도로 1개소(L-416m, B=15m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,500		100	2,000	3,400
국 비
시 도 비
시군구비	5,500		100	2,000	3,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 용지보상 63%)

○ 현재 1차 구간(씨씨할인마트 ~ 스테이83)은 용지보상 80%진행 완료하였고, 2차 추경시 4억5천만원 확보하여 수용재결 신청 예정

○ 2차구간(스테이83 ~ 상미식물원)은 현재 1필지 보상 완료 하였음

□ 향후계획

○ 2022.  7. : 수용재결 신청

○ 2022. 12. : 보상완료

○ 2023.  3. : 공사 착공

○ 2023. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 전체구간으로 사업계획 되었으나, 제2경춘국도 사업구간 중첩됨에 따라 2개 사업으로 분할 시행